Päring

Ehitusobjekt: Tahkuranna vald Reiu küla
Ehitis: Palkmaja 140 m2, 1,5 kordne, I korrus palkidest, II korrus puitkarkassist
Ehitustööde aeg: 
I etapp: 23.10-23.11.2006 Vundamenditööd:, lintvundament 1,20 m kõrgusega, fibo 20cm.
II etapp: 10.12-20.12.2006 Palkosa vundamendile püsti: 
III etapp: 20.12-30.01.2007
Katus kinni (II korruse karkassosa ja sarikate ehitus, kivikatus peale, ei pea soojustama) 
IV etapp: kevad 2007 katuse ja seinte soojustus, sisetööd, uste ja akende paigaldus, põrandad, kanalisatsioon, elekter, välisviimistlus, terrass. Tähtaeg: 20.06.2007

Soovitud tööd:

III ja IV etapp

Soovime tellida palkmaja ehitustööd koos materjalidega. Palkmaja vundamendi ja palkosa koos püstitamisega teeme ise. 

Tehtavad tööd III etapp:
Sarikad (50*175mm) ja paigaldus, kõik vajaminevad liistud, katusekile,  
II korruse karkassseinte ehitus (soojustamine ja laudisega viimistlemine toimub kevadel),
II korruse otsaviilude väljaehitus, tuuletõkkega katmine ja voodrilauaga katmine väljast,
II korruse „musta põranda“ tegemine,
Katusekatte –kivi- paigaldus.

III etapi juures on oluline, et saaks võimalikult ruttu maja katuse alla.

Tehtavad tööd IV etapp:
Katuse soojustus ja voodrilauaga viimistlus,
II korruse seinte soojustus ja voodrilauaga viimistlus
II korruse põrandakatte paigaldus ja soojustus (põrandalaud 38*95mm)
I korruse plaatimistööd
I korruse põrandatalade paigaldus, soojustamine ja põrandalauaga katmine
Uste ja akende paigaldus
Korstna ja kamina ehitus
Trepi valmistamine
I korruse karkass seinaosa ehitus ja viimistlus
Terrassi ehitus
Imbväljaku ja septiku paigaldus
San tehnika paigaldus: 3 valamut, 1 du, 1 wc pott
Välisviimistlus – palkosa teha üle puidukaitse vahendiga või vastava õliga.

Projekt: Kõik vajalikud andmed saab kaasasolevast projektist.
Materjalid: Kõik materjalid peale katusekatte ja uste ning akende on tööde teostaja poolt.

Edaspidise pikema koostöö võimalus palkmajade ehitusel.